개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

금강공원 재정비사업

담당자

공원운영과 천태룡(☎888-3824)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금강공원 재정비를 통한 도심속 휴식공간 재창출 및 기존 재래

공원의 이미지 변신 등으로 차별화된 시민 여가시설 조성

□ 사업개요

○ 사 업 기 간  : 2012년 ～ 2020년

○ 위치(구간) : 동래구 온천동 금강공원 일원(전체면적 : 3,096,579㎡)

○ 사 업 규 모(내용) : 공원재정비 A= 400,000㎡ (유희시설 등 21개 시설)

○ 사  업  비  : 1,891억원(시비397, 민자709, 민간785)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 189,070백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	189,070	11,156	5,440	2,100	170,374
지 방 채	10,200	6,200	4,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	100,350	4,956	1,440	2,100	91,854
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	78,520	-	-	-	78,520

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ ’10. 8.  : 금강공원 재정비 용역 착수

○ '13. 7.  : 공원조성계획 변경 및 투ㆍ융자심사(안행부) 통과

○ '14. 4.  : 실시설계 용역 착수 및 미로공원 보상추진

○ '16. 4.  : 주차장(2차) 보상 열람공고 및 실시설계용역 착수

○ '16.12.  : 주차장 조성공사 실시설계용역 준공

○ '17. 6.  : 주차장(2차) 수용재결 결정

□ 향후계획

○ '17.10. : 주차장(2차) 협의보상 완료 및 부지정지 공사 착공

○ '19.12. : 주차장 조성공사 준공

○ '20.12. : 진입광장 등 공원기반시설 설치완료

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경: 당초 2017년 12월 준공⇨ 2020년 12월 준공

사업명

에덴유원지 조성

담당자

공원운영과 양기조(☎888-3814)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역균형 발전과 동·서간 문화격차 해소를 위해 서부산권을 대표하는   관광·문화공간 창출 필요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2018년

○ 위 치 : 사하구 하단동 786-1번지 일원

○ 규 모 : 72,712㎡(에덴원, 낙조관람대, 강선대마당, 플리마켓, 에코어드벤처 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	18,500	-	544	3,000	14,956
지 방 채	2,500	-	44	-	2,456
국 비	5,000	-	-	2,000	3,000
시 도 비	11,000	-	500	1,000	9,500
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

○ ’14.10. : 에덴유원지 관광자원화 사업 추진방침 결정

○ ’15. 3. : 지방재정 투․융자사업 심사 승인

○ ’15.11. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ ’16. 5. : 중간보고회 개최, 기본구상(안) 확정

○ ’16. 8. : 보상물건 조사 완료 및 보상업무 이관(건설본부)

○ ’16.9.∼12. : 1차 보상 추진(23억원, 5,548㎡), 실시설계 등 추진

○ ’17. 3. : 기본 및 실시설계 완료

□ 향후계획

○ ’17. 8. : 공사(1차) 발주

○ ’18. 1. : 2차 보상 추진(90억원, 67,455㎡)

○ ’17. 8. ∼ ’18.12. : 공사시행 및 준공

사업명

하야리아부지 매입

담당자

공원운영과 이정훈(☎888-3795)

□ 사업목적 및 필요성

○ 캠프하야리아 부지 처분협약서(국방부⇔부산시, ’08. 01. 08.) 및 캠프하야리아 부지 부분 매입계획(’10. 02. 11.)에 의거 미 보상된 잔여부지(토지)에 대하여 매입

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘16년1월 ~ 7월

○ 위 치 : 부산진구 부산시민공원

○ 규 모 : 13필지 3,099㎡ 보상

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,652백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,652	-	3,652	-	-
지 방 채	3,000	-	3,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	652	-	652	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘16. 4. : 부지매수 신청(부산시→국방부)

○ ‘16. 5. : 매각결정(국방부) 및 매매계약 체결

○ ‘16. 6. : 보상금  지급

○ ‘16. 7. : 소유권 이전 촉탁등기

□ 향후계획

○ 부산시민공원 시민이용 활성화를 위한 프로그램 개발 및 공원시설 관리 철저

사업명

부울고속도로~관광단지 연결도로개설

담당자

관광개발추진단

성국경(☎888-6711)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부산울산고속도로와 관광단지를 연결하는 연결도로로서, 오시리아 관광

단지를 방문하는 관광객들의 접근성을 향상.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ~ 2016년

○ 위 치 : 부산시 기장군 기장읍 내리 일원

○ 규 모 : 연결도로 L=1.475km  B=7.5~45m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 49,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	49,900	23,500	4,500	-	21,900
지 방 채	3,000	-	3,000	-	-
국 비	14,500	14,500	-	-	-
시 도 비	32,400	9,000	1,500	-	21,900
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 56%)

○ ‘13. 8. : 도로구역결정 및 지형도면고시

○ ‘14. 1. : 연결도로 공사착공

○ ‘16. 4. : 연결도로 동부산나들목 개통

□ 향후계획

○ ‘18년 ~ : 미지급된 잔여사업비 확보 후 부산도시공사 지급

사업명

덕천(화명)~양산간 도로건설

담당자

교통운영과 조령기(☎888-3921)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부산~양산시 물금간을 연결하는 기간도로망 확충으로 지역간 접근성

개선을 통한 물류비용 절감 및 산업단지 배후도로 기능제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2001년 ~ 2018년

○ 위 치 : 덕천(화명) ~ 양산시계간

○ 규 모 : 도로개설(L=6,800m, B=18~38m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  227,603백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	227,603	203,985	8,264	12,401	2,953
지 방 채	33,100	23,100	5,899	4,101	-
국 비	104,100	100,000	1,300	2,800	-
시 도 비	90,403	80,885	1,065	5,500	2,953
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ ‘16. 3 : 화명IC(램프E교) 개통

○ ‘16.12 : 화명IC(램프A,C,D,F교) 개통

□ 향후계획

○ ‘18. 9. : 화명IC 램프B교 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 213,350백만원 → 227,603백만원(증 14,253백만원)

○ 사업기간 변경 : ‘01~‘16년 → ‘01~‘18년

-  사  유 : 화명IC공사 램프B교 추가 시공 반영

사업명

심해해양공학수조 기반구축

담당자

기간산업과 박  현(☎888-4654)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양플랜트 설계를 위한 기술역량 강화 및 성능평가 기술수요 충족

○ 국내 해양플랜트산업 경쟁력 제고 및 고부가치화 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2018년

○ 위 치 : 강서구 생곡산업단지 내, 부지 27,750㎡(8,400평)

○ 규 모 : 공학수조[100×50×15(Pit 50)m〕※ 세계최대규모

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 92,607백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	92,607	66,450	16,471	-	9,936
지 방 채	5,000	-	5,000	-	-
국 비	47,900	36,900	11,250	-	-
시 도 비	11,807	1,650	221	-	9,936
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	27,900	27,900	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ `13.11.27. : 부산시, 산업부, 해수부, 연구소, 조선3사 사업협약 체결

○ `14.6.~`15.4. : 기본설계

○ `14.12.12. : 부지계약 체결(계약금 16.5억원, 4회 분할 납부)

○ ‘16.6.27. : 수조구조공사 계약체결

○ `17. 3. : 터파기 공사 완료

□ 향후계획

○ `17.12. : 구조물 및 철공 완료

○ `18.12. : 수조 신축공사 준공

사업명

해양플랜트 고급기술 연구기반구축

담당자

기간산업과 박  현(☎888-4654)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양플랜트 초기설계 수행과 습득으로 (기초)설계 자립화 달성

○ 초기설계에서 국산기자재 탑재 유도로 기자재 국산화율 획기적 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2020년

○ 위 치 : 강서구 생곡산업단지 내, 부지 7,449㎡(8,400평)

○ 규 모 : 연구센터 구축 3,000㎡, 설계 장비구축 1식, 프로젝트 등 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 65,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	65,800	3,900	12,160	-	31,515
지 방 채	2,000	-	2,000	-	-
국 비	42,800	2,000	8,000	16,025	16,775
시 도 비	11,500	-	260	-	11,240
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	9,500	1,900	1,900	2,200	3,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20%)

○ ‘14. 5. : (산업부) 산업기술개발 기반구축사업 기획과제 선정

○ ‘15. 8. : 업무 협약(전담기관 ↔ 주관기관)

○ ‘16. 2. : 임시사무실 계약 및 입주(부경대 한미르관)

○ ‘16. 6~9 : 건축 설계 공모 및 심사, 실시설계업체 선정 등

○ ‘16. 9. : 부지계약 (4,409백만원) ▷ 4회 분할납부

○ ‘17. 3. : 설계 전산시스템 3종 구축 완료

○ ‘17. 5. : 총사업비 증액 160억원(국비)

□ 향후계획

○ ‘17.12. : 연구동 건축설계 완료

○ ‘18. 2. : 건축 계약 및 착공

○ ‘18.12. : 건축 준공 및 장비 이전완료

○ ‘20. 4. : 사업완료

□ 사업변경 내역

○ 조선산업 퇴직기술인력 해외유출을 방지하고 선체중심의 설계 및 해석 핵심기술 자립화를 위해 2017년 국비 160억 증액

사업명

조선기자재 성능고도화 기반구축

담당자

기간산업과 장지은(☎888-4651)

□ 사업목적 및 필요성

○ 조선기자재 중소기업 공동활용, 공인시험인증 통합지원체계 구축

○ 극지용 선박 및 글로벌 환경규제에 대한 조선기자재 개발 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2019년

○ 위 치 : 강서구 미음동 미음산단 연구개발내, 부지 17,861㎡(지하1/지상3)

○ 규 모 : 연구동 1(2,345㎡), 연구동 6개동, 9 시스템 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	33,300	6,500	11,575	3,900	11,325
지 방 채	5,000	-	5,000	-	-
국 비	19,000	3,500	5,600	3,900	6,000
시 도 비	8,300	2,000	975	-	5,325
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	1,000	1,000	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  82%)

○ ‘13. 3. : (산업부) 성장동력기반구축 신규사업 최종평가(1위 통과)

○ ‘14. 7. : 한국산업기술진흥원 ↔ 한국조선해양기자재연구원 사업협약체결

↳ 사업 전담기관          ↳ 사업 시행기관

○ ‘14. 12. : (시의회)공유재산 취득 승인 및 시비예산 확정

▹‘15년도 시비 예산 20억원 (부지 계약금 10, 건축비 현금납입 10)

○ ‘15. 2. : 구축부지 매매계약체결(부산시 ↔ 부산도시공사)

○ ‘15. 7. : 센터 공사착공

○ ‘16. 1. : 주요 시험평가 장비 입고

○ ‘16. 6. : 센터 건축공사 완공 및 개소식

□ 향후계획

○ ‘17. 8. : 기계충격시험기, 진동피로시험기, 강우 및 침수시스템 도입완료

○ ‘17.10. : 고변위 복합환경 진동시험기 등 시험장비 도입완료

○ ‘19. 6. : 사업완료

사업명

자동차부품 글로벌 품질인증기술

기반구축사업

담당자

기간산업과 김진수(☎4644)

□ 사업목적 및 필요성

○ FTA확대 및 해외완성차업체의 글로벌화로 부품업체의 수출 수요증가에 따른

자동차부품 수출 극대화를 위한 해외 완성차업체 납품인증 획득 지원

인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2017년

○ 위 치 : 강서구 미음 R&D허브단지 내

○ 규 모 : 부지 6,841㎡, 연면적 3,939㎡, 시험장비 16종 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 37,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	37,100	12,580	10,244	10,366	3,910
지 방 채	5,000	-	5,000	-	-
국 비	19,000	9,000	3,900	6,100	-
시 도 비	13,000	3,540	1,314	4,236	3,910
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	100	40	30	30	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  50%)

○ ‘13. 5. : 품질인증센터 사업계획 수요조사 용역 완료

○ ‘13.12. : 1차년도 사업추진

○ ‘14.12. : 2차년도 사업추진

○ ‘15.12. : 3차년도 사업추진

□ 향후계획

○ ‘17. 11. : 장비 시험 운영

○ ‘17. 12. : 센터건축 준공

사업명

강변대로 확장

담당자

도로계획과 김광훈(☎888-2721)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시철도 1호선(다대선) 연장 건설에 따른 대체 우회도로 확보

○ 을숙도 대교 접속도로 및 항만배후도로 병목구간 해소로 물류수송 원할

○ 다대포 해수욕장 일대의 관광자원화와 연계한 도로정비 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008년 〜 2017년

○ 위 치 : 사하구 신평동 66호광장 〜 다대동 (주)대아선재

○ 규 모 : 도로확장 L=3,800m, B=25→31m, 도로정비 L=450m, B=30m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,575백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	33,575	20,364	8,000	5,211	-
지 방 채	10,000	-	5,000	5,000	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	23,575	20,364	3,000	211	-
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 88%)

○ ’08. 7. ~ ’09.12. : 기본 및 실시설계용역 시행

○ ’10. 5. ~ ’13. 1. : 장림공단 측 도로확장 완료

○ ’17. 2. : 10차 공사 착공(경관 시설물 11개소 설치)

○ ’17. 3. : 9차 공사 준공

○ ’17. 7. : 중앙분리대 설치 및 보도구간 포장 중

□ 향후계획

○ ’17. 9. : 경관시설물 및 도로시설물 설치 완료

○ ’17.11. : 도로개통 (전체사업 준공)

사업명

다대포해수욕장~몰운대간 도로개설

담당자

도로계획과 김광훈(☎888-2721)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다대포 해수욕장~몰운대간 협소한 도로 양쪽 무허가 노점상의 난립으로       경관저해 및 교통정체 유발 등 방문객의 불편 가중으로 도로개설 필요

○ 다대포 연안정비사업 준공시기와 연계, 다대포 해수욕장~몰운대간 도로       개설로 교통불편 해소 및 연안정비사업 효과 극대화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 〜 2017년

○ 위 치 : 사하구 다대동 470-3번지 일원(몰운대 진입로)

○ 규 모 : 도로개설 L=330m, B=30m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,120	3,820	3,300	-	-
지 방 채	3,000	-	3,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,120	3,820	300	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ’16. 2. : 보상계획공고, 열람 및 통지,  감정평가 및 보상금 산정

○ ’16. 3. : 보상협의 완료, 도로개설 공사착공

○ ’16. 6. : 도로개설(L=330m, B=30m) 완료

○ ’16.12. : 도로 경관개선사업(L=300m, B=6~30m) 완료

○ ’17. 4. : 도로개설 구간 하수시설 정비공사 완료(사업 완료)

□ 향후계획

○ 도로 유지관리

사업명

북항대교~동명오거리간 고가 지하차도 건설

담당자

도로계획과 이동우(☎888-2722)

□ 사업목적 및 필요성

○ 북항대교 개통에 따른 신선대부두 오거리, 동명오거리 등 교통혼잡 해소

○ 해안순환도로 구축으로 항만물동량의 원활한 수송과 도심교통난 완화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008년 〜 2016년

○ 위 치 : 남구 감만동(북항대교 종점) ~ 남구 대연동(평화공원)

○ 규 모 : 도로건설 L=3,040m, B=4차로(고가차도 및 지하차도)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 220,290백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	220,290	213,000	7,290	-	-
지 방 채	6,000	-	6,000	-	-
국 비	53,900	53,900	-	-	-
시 도 비	160,390	159,100	1,290	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ’10.12. : 1공구 착공(감만동 부산항대교 종점~신선대부두 800m)

○ ’11. 4. : 2공구 착공(신선대부두~동명오거리 2,240m)

○ ’14. 3. : 1공구(교량구간) 완료

○ ’16. 3. : 지하차도 공사완료 ▹개통

○ ’16. 9. : 평면도로 복구완료(전체준공)

□ 향후계획

○ 도로 유지관리

사업명

산성터널(금정측) 접속도로 건설

담당자

도로계획과 윤태균(☎888-2716)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동⋅서부산권을 연결하는 외부순환도로망 주요 간선도로 구축

○ 민자 추진 중인 산성터널과 연결 기능 수행을 위해 도로건설이 시급함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2007년 〜 2019년

○ 위 치 : 금정구 장전동(장전초교) ～ 금정구 회동동(회동IC)

○ 규 모 : 도로건설 L=3,240m, B=20~50m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 277,185백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	277,185	89,458	36,649	59,972	91,106
지 방 채	70,848	15,848	20,000	35,000	-
국 비	116,100	43,058	16,649	10,840	45,553
시 도 비	90,237	30,552	-	14132	45,553
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ ’06. 7. : 대도시권 교통혼잡도로 지정(국토해양부)

○ ’11.12. ~ ‘12.12. : 실시설계용역 시행

○ '13. 8. : 1공구 공사착공(L=1,000m)

○ ‘14. 6. : 2공구 공사착공(L=220m)

○ ‘14.11. : 3공구 공사착공(L=2,020m)

○ '17. 7. : 1·2공구 지하차도, 3공구 윤산터널 굴진, 회동IC 토공사 등

□ 향후계획

○ ‘18. 9. : 2공구 공사준공

○ ‘19. 9. : 1공구 공사준공

○ ‘19.10. : 3공구 공사준공

사업명

산성터널(화명측) 접속도로 건설

담당자

도로계획과 윤태균(☎888-2716)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화명대교 개통과 향후 산성터널 접속도로 기능 수행

○ 경남 주요도시 광역교통망 구축, 도심 간선도로의 교통여건 개선

○ 외부순환도로 구축으로 시내 주요 간선도로의 교통여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2007년 〜 2018년

○ 위 치 : 북구 화명동(화명I/C) ~ 화명동 산성터널 입구간

○ 규 모 : 도로건설 L=1,680m, B=18~50m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 147,219백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	147,219	115,882	7,000	14,198	10,139
지 방 채	17,000	-	7,000	10,000	-
국 비	61,730	56,332	-	2,198	3,200
시 도 비	68,489	59,550	-	2,000	6,939
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 82%)

○ ‘07. 7. : 1공구(330m) 착공 (▹ ‘12. 4 준공)

○ ‘10.12. : 2공구(270m) 착공 (▹ ‘15. 5 준공)

○ ‘12. 7. : 3공구(1,080m) 착공

○ ‘17. 7. : 지하차도, 합벽식옹벽, 지하차도 U-type 구조물 시공

□ 향후계획

○ ‘18.12. : 전체구간(1,680m) 준공

사업명

온천사거리~미포육거리간 도로확장

담당자

도로계획과 김광훈(☎888-2721)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시철도 1호선(다대선) 연장 건설에 따른 대체 우회도로 확보

○ 을숙도 대교 접속도로 및 항만배후도로 병목구간 해소로 물류수송 원할

○ 다대포 해수욕장 일대의 관광자원화와 연계한 도로정비 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 〜 2018년

○ 위 치 : 해운대구 중동 온천사거리 ~ 미포육거리 일원

○ 규 모 : 도로확장 L=615m, B=12~15→20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	14,400	8,000	2,600	-	3,800
지 방 채	3,000	3,000	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	11,400	5,000	2,600	-	3,800
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ ’13. 5. : 도시계획시설 결정 고시

○ ’12. 4. : 도시계획시설사업 결정(변경) 및 지형도면 고시

○ '14. 3. : 1차 손실보상 완료

○ ‘16. 5. : 2차 손실보상 완료

○ ‘17. 7. : 3차 손실보상 및 지장물 철거

□ 향후계획

○ ‘17.12. : 보상완료 지장물 철거공사 완료

○ ‘18.12. : 전구간 사업 준공

사업명

을숙도대교~장림고개간 도로건설

담당자

도로계획과 김상석(☎888-2724)

□ 사업목적 및 필요성

○ 녹산~을숙도대교~천마산터널~남항대교~광안대교 연결 항만배후도로 및       내‧외부 순환도로 조기구축으로 공항․항만 물동량 수송체계 확립

○ 신평‧장림공단 내 을숙도대로 도로 확충으로 지역개발 및 교통정체 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 〜 2020년

○ 위 치 : 사하구 신평동(을숙도대교) ~ 구평동(장림고개)

○ 규 모 : 도로건설 L=2,310m, B=21~35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 179,285백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	179,285	4,723	15,040	26,002	133,520
지 방 채	13,000	-	6,000	7,000	-
국 비	79,280	4,723	9,040	16,002	49,515
시 도 비	87,005	-	-	3,000	84,005
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ ‘13. 2. ~ 12. : 예비타당성조사 시행(KDI)

○ ‘15.12. : 기본 및 실시설계 용역 준공

○ ‘16.12. : 공사 착공

○ ’17. 7. : 시점부 및 터널 시‧종점부 작업구 가시설 설치 및 토공 중

□ 향후계획

○ ’17. 8. : 종점부 합벽식 옹벽공사

○ ’18. 5. : 터널공사 착수

○ ’20.12. : 공사 준공

사업명

장림공단~동원로얄듀크아파트간 도로개설

담당자

도로계획과 김광훈(☎888-2721)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장림공단 입주 업체 물류비용 절감과 공단대로 상습정체 해소

○ 낙후된 장림지역에 대한 지역적 배려로 주민숙원사업 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008년 〜 2017년

○ 위 치 : 사하구 신평동 66호광장 〜 다대동 (주)대아선재

○ 규 모 : 도로확장 L=3,800m, B=25→31m, 도로정비 L=450m, B=30m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	14,000	100	2,000	500	11,400
지 방 채	2,000	-	2,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	12,000	100	-	500	11,400
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ ‘14. 2. ~ 15.12. : 실시설계 용역 시행

○ ‘16. 4. : 1차 공사 착공 ▷ 공사 정지(’16. 4. 8, 보상절차 이행)

○ ‘17. 2. : 보상 및 이주 완료

○ ‘17. 3. : 공사일시 정지 해제(’17. 3. 2)

○ ‘17. 7. : 1차 공사 추진 중

□ 향후계획

○ ’17. 8. : 1차 공사 준공

○ ‘20.12. : 전 구간 준공 예정

사업명

장안~임랑간 국지도 건설

담당자

도로계획과 윤태균(☎888-2716)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동부산권 개발에 따른 간선도로 확보

○ 서부산권과 동부산권 도로 확충으로 지역간 균형발전 및 물류비용 절감

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008년 〜 2017년

○ 위 치 : 기장군 장안읍 좌천리(국도14호선)～임랑리(국도31호선)

○ 규 모 : 도로건설 L=2,500m, B=20~25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 65,441백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	65,441	57,336	4,508	3,597	-
지 방 채	2,000	2,000	-	-	-
국 비	34,698	33,893	208	597	-
시 도 비	28,743	21,443	4,300	3,000	-
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 96%)

○ ’10.12. : 1공구 (L=1.3km, B=20~25m) 공사 착공

○ ’12. 5. : 2공구 (L=1.2km, B=25m) 공사 착공

○ ’12. 6. : 1공구 덕선천교 완료

○ ’14. 5. : 2공구 장안1교 완료 및 장안2교 완료

○ ’15.12. : 2공구(L=1.2km) 준공 및 좌천~임랑간 개통(L=1.7km)

○ ‘17. 7. : 1공구 잔여구간 공사 중

□ 향후계획

○ ‘17.10. : 전체공사 준공

○ ‘17.12. : 전 구간 개통 예정(시설물 이관 및 개시공고 절차 이행)

사업명

전포로 확장

담당자

도로계획과 김광훈(☎888-2721)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전포로~하마정간 도로확장 및 송상현광장과 연계 원활한 교통망 확충

○ 장기미집행 도시계획시설(도로) 조기개설에 따른 민원 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 1992년 〜 2019년

○ 위 치 : 부산진구 전포동 삼전교차로 ~ 문전교차로

○ 규 모 : 도로확장 L=1,500m, B=25→50m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 104,844백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	104,844	72,307	5,500	6,500	20,537
지 방 채	16,500	5,000	5,000	6,500	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	88,344	67,307	500	-	20,537
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 72%)

○ ’92~‘01. : 도로확장 L=920m, B=25→50m(지하철2호선 구간)

○ ’06~‘11. : 보상시행 L=253m, B=25→50m(롯데캐슬Apt~전포시장)

○ ‘14.12.  : 도로확장 L= 50m, B=25→50m(서면대우디오빌 건너편)

○ ‘15.12.  : 도로확장 L= 45m, B=25→50m(구 전포동 육교 주변)

○ ‘16. 3.  : 도로확장 L=120m, B=25→50m(국유지 지장물 보상, 철거 중)

○ ‘17. 7.  : 전포시장 감정평가 착수

□ 향후계획

○ ‘17.12. : 보상 및 공사완료(’16년도분)

○ ‘19.12. : 전 구간 공사완료

사업명

천마산터널 건설(민자)

담당자

도로계획과 이동우(☎888-2722)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신항~북항 간 항만물동량 원활한 수송 및 항만 배후수송체계 적기 구축

○ 항만화물 운송차량 시가지 우회로 도심교통난 완화 및 물류비용 절감

□ 사업개요

○ 기 간 : 2007년 〜 2018년

○ 위 치 : 서구 암남동 ~ 사하구 감천동

○ 규 모 : 도로건설 L=3,280m, B= 4차로

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 306,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	306,500	131,300	46,700	52,500	76,000
지 방 채	17,000	7,000	-	10,000	-
국 비	29,900	22,200	7,700	-	-
시 도 비	79,700	33,300	7,300	2,500	36,600
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	179,900	68,800	31,700	40,000	39,400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ ‘11. 4. : 민간투자사업 실시협약 체결

○ ‘12. 7. : 천마산터널 민간투자사업 실시계획 승인 고시

○ ‘12.10. : 공사착공

○ ‘13. 9. : 실시계획 변경 고시(천연가스발전본부 내 노선 변경)

○ ‘16.10. : 실시계획 변경 고시(공사기간 26개월 연장)

○ ‘17. 7. : 터널 굴진 및 지하차도 터파기 및 구조물 시공 중

□ 향후계획

○ ’17.12. : 터널굴진 완료, 지하차도 구조물 시공(계속)

○ ’18.12. : 공사준공

사업명

충무로 확장

담당자

도로계획과 김광훈(☎888-2721)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남항대교, 남북항연결도로, 천마산터널과 연계한 도심 기반시설 확충

○ 원도심, 감천항 및 부산신항 간 주연결도로 상습 교통체증 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2003년 〜 2020년

○ 위 치 : 서구 충무동 교차로 ~ 암남동 정림아파트

○ 규 모 : 도로확장 L=2,293m, B=25→35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 78,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	78,000	58,300	5,000	3,000	11,700
지 방 채	11,000	5,000	3,000	3,000	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	67,000	53,300	2,000	-	11,700
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ ‘03. 3. ~ ‘11. 7.  : 도로확장(1~10차, L=783m, B=25→35m) 완료

○ ‘16.12. : 도로확장(11차, L=160m, B=30→35m) 공사 준공

○ ‘16.12. : 도로확장(12차, L=300m, B=25→35m) 공사 준공

○ ‘17. 3. : 도로확장(13차, L=180m) 건물철거공사 준공

○ ‘16. 6. : 도로확장(14차, L=300m, B=25→35m) 공사 착공

□ 향후계획

○ ‘17.10. : 도로확장 14차 준공

○ ‘20.12. : 도로확장 전 구간 준공

사업명

부산현대미술관 건립사업

담당자

문화예술과

윤병채(☎888-5074)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전시시설 부족 해소 및 한국을 대표하는 미술축제인 부산비엔날레 전시장 확보

○ 서부산권에 다목적 활용이 가능한 복합적 전시공간으로 조성

- 평상시 시민갤러리, 기획전시, 야외조각전시장 등 다목적 전시․문화 공간으로 활용

○ 생태공원내 자연환경과 조화를 이룰 수 있는 친환경적 공간 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2008년～2017년

○ 위    치 : 부산광역시 사하구 하단동 1149-37번지 일원

○ 사업규모 : 연면적 : 15,290㎡, 지하2 ~ 지상4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 43,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘16연도	‘17연도	‘18연도 이후
계	43,000	21,798	10,221	10,981	-
지 방 채	14,400	-	3,500	10,900	-
국 비	16,400	12,179	4,221	-	-
시 도 비	12,200	9,619	2,500	81	-
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ '10. 5.  : 지방재정 중앙 투․융자심사 승인

○ '10.10.  : 공유재산관리계획 반영 ▹공유재산관리계획 변경(‘13.9)

○ '12. 2. : 설계․시공 실시설계적격자 선정(주, 한진중공업 컨소시엄)

○ '12. 9 .~ 11. : 문화재현상변경허가 심의, 교통영향평가 심의

○ '13.  4. : 실시설계 완료

○ '13. 8. : 하천구역 폐지 고시

○ ´13.11. ~ : 공사추진,         ○ ´17. 2. : 공사 준공

□ 향후계획

○ 현대미술관 유지 관리

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비고
위 치	사하구 하단동 1149-34번지 일원	사하구 하단동 1149-34번지 일원
사업규모	대지 25,000㎡ 연면적 18,346㎡ 지하1층/지상4층	대지 29,900㎡ 연면적 15,290㎡ 지하2층/지상4층
사업기간	08년～15년	08년～17년
총사업비	410억원	430억원
변경사유	문화재현상변경 심의 조건 이행

사업명

소방안전체험관 건립

담당자

119안전체험관 전승훈

(☎760-5823)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민 안전문화 정착을 위한 체험형․현장형 교육시설 구축 필요

○ 다양한 재난유형별 체험활동을 통한 위기대처능력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2016년

○ 위 치 : 동래구 우장춘로 117번길

○ 규 모 : 부지 16,277㎡, 연면적 7,915㎡, 지하1층/지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,374백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	29,374	21,982	7,059	-	-
지 방 채	5,700	2,000	3,700	-	-
국 비	11,000	11,000	-	-	-
시 도 비	12,674	8,982	3,359	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100 %)

○ ‘14. 6. : 건축공사 계약체결 및 착공

○ ‘16. 4. : 공사 준공

□ 향후계획

○ 소방안전체험관 유지관리

사업명

영상산업센터 건립

담당자

영상콘텐츠산업과 이복자

(☎888-5144)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영화․영상관련 기업 입주공간 및 감독, 프로듀서, 자가 등 개인창작,

비즈니스를 위한 창작 환경 조성 및 부산 영화․영상산업 육성

□ 사업개요

○ 위 치 : 해운대구 센텀서로 39

○ 규 모 : 지상4층 〜 지상12층, 연면적 9,221㎡

○ 기 간 : 2015년 〜 2017년

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	19,550	5,000	8,775	5,775	-
지 방 채	8,700	-	3,000	5,700	-
국 비	9,775	4,000	5,775	-	-
시 도 비	1,075	1,000	-	75	-
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 76%)

○ ’15. 6.〜’16. 4. : 영상산업센터 2단계사업 실시설계 착수 및 완료

○ ’16. 7. : 공사 착공

□ 향후계획

○ ’17.10. : 공사 준공

사업명

거제지구 상습침수지 정비

담당자

재난대응과 이동하(☎ 888-2972)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상습침수지역인 거제동 일원을 정비하여 집중호우시 온천천 수위상승에

역류 발생 및 배수불량 정비하여 인명 및 재산피해 위험 요소 제거

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2016년

○ 위 치 : 연제구 거제1동 1463번지 일원

○ 규 모 : 배수펌프 설치 11대, 유입관로 D=2,400mL= 224m 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	27,500	17,435	10,065	-	-
지 방 채	5,300	1,300	4,000	-	-
국 비	14,038	9,005	5,033	-	-
시 도 비	8,162	7,130	1,032	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘11. 3. : 자연재해위험지구 지정

○ ‘12. 2. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ ‘13. 5. : 공사 착공 ▷ 준공 : ’17.02.

□ 향후계획

○ 배수펌프장 유지관리

사업명

수영지구 우수저류시설 설치

담당자

재난대응과 이동하(☎ 888-2972)

□ 사업목적 및 필요성

○ 집중 호우시 수영중학교 인근, 한바다중학교～만남의 광장, 삼정그린코아 아파트 인근에 빈번한 침수피해 발생에 따른 피해 예방 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2016년

○ 위 치 : 수영구 광안동 732번지(수영중학교)

○ 규 모 : 우수저류시설 설치 V = 17,900㎥,  관로정비 L=1,081m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	19,600	13,294	6,306	-	-
지 방 채	2,500	-	2,500	-	-
국 비	9,800	7,978	1,822	-	-
시 도 비	7,300	5,316	1,984	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘13.10. : 우수저류시설 설치 사업대상지 선정(소방방재청)

○ ‘14. 2. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ ‘14. 6. : 공사 착공(관로공사 우선착공) ▷ 준공 : ’17. 2.

□ 향후계획

○ 우수저류시설 유지관리

사업명

부산지식산업센터 건립

담당자

창업지원과 조윤서(☎888-6732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도심의 지속적인 공장용지 가격상승으로 입지에 어려움을 겪는 중소기업

입지애로 해소 및 저소득층 고용확대를 통한 생산적 일자리 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2016년

○ 위 치 : 부산광역시 북구 금곡동 812-8번지 (효열로 111)

○ 규 모 : 대지 9,900㎡, 연면적 16,226.86㎡ (지하1․지상6층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	30,000	22,900	7,100	-	-
지 방 채	5,323	5,323	-	-	-
국 비	15,800	13,900	1,900	-	-
시 도 비	8,877	3,677	5,200	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘16.11.30. : 조경 및 소방 등 각종공사 최종 종료

○ ‘16.12.29. : 지식산업센터 관리위수탁계약 체결(부산시⇔경제진흥원)

○ ‘17. 3.24. : 부산지식산업센터 개관식 개최

□ 향후계획

○ ’17.8.～ : 지식산업센터 입주신청 공모

○ ’17.4.~12. : 센터 입주기업 공동 국비 과제사업 등 제안 및 수행

사업명

도시철도 1호선 연장(다대선) 건설

담당자

철도시설과 하치덕(☎888-4072)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서부산권, 도시철도망 확충으로 지역균형발적 촉진 및 신평․다대지역의

만성적인 교통난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2006년 ~ 2017년

○ 위 치 : 사하구 신평～장림～다대동 일원

○ 규 모 : L=7.98㎞, 6개역, 차량기지 1개소

○ 총사업비 : 9,589억원(공사비 8,734, 보상비 240, 기타 615)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 958,994백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	958,994	729,811	169,276	25,000	34,907
지 방 채	100,700	85,700	15,000	-	-
국 비	540,456	479,866	59,276	-	1,314
시 도 비	317,838	164,245	95,000	25,000	33,593
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 94%)

○ ‘08. 6. : 기본계획 승인(국토해양부)

○ ‘08.10. : 기본 및 실시설계 착수(기타공사)

○ ‘09.11. : 턴키구간(1~4공구) 착공

○ ‘10.11. : 대안구간(5~6공구) 착공

○ ‘16.11. : 건설공사 완료

○ ‘17. 4. : 개통

□ 향후계획

○ ‘18년 : 차량기지내건축시설물 설치(분소동, 검수고)

□ 사업변경 내역

○ ‘16. 5. : 총사업비 변경(9차, 955,826백만원 → 958,994백만원)

사업명

부산 그린레일웨이 조성

담당자

철도시설과 권덕만(☎888-4091)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동해남부선 폐선 부지를 활용하여 국내․외 관광객의 체험 및 휴식공간 제공

○ 해운대 관광특구와 수려한 해안절경이 연계되는 관광벨트 조성으로 관광객

및 시민들의 편의 제공과 관광인프라 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2018년

○ 위 치 : 해운대구 올림픽교차로 ~ 기장군 동부산관광단지

○ 규 모 : 산책로, 쉼터, 녹지 등 연장 9.8㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  31,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	31,600	3,336	10,384	5,860	12,020
지 방 채	7,000	-	7,000	-	-
국 비	10,000	983	3,237	1,740	4,040
시 도 비	14,600	2,353	147	4,120	7,980
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 43%)

○ ‘15. 9. : 1차공사 착공(올림픽교차로~부산기계공고간, L=1.6㎞)

○ ‘16. 6. : 2차공사 착공(부산기계공고~동부산관광단지, L=3.4㎞)

○ ‘16.12. : 1차공사 준공(올림픽교차로~부산기계공고간, L=1.6㎞)

□ 향후계획

○ ‘17.10. : 3차공사 착공(미포~구 송정역, L=4.8㎞)

○ ‘17.12. : 2차공사 준공예정

○ ‘18.12. : 3차공사 준공예정(미포~구 송정역, L=4.8㎞)

사업명

부산도시철도 스크린도어 설치사업

담당자

철도시설과 서호진(☎888-4077)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자살, 추락, 열차 접속 등 승객안전의 근본적 예방과 미세먼지 유입 방지로       쾌적한 승차환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2018년

○ 위 치 : 부산도시철도 1,2호선

○ 규 모 : 32역

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 89,167백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	89,167	53,500	15,700	19,967	-
지 방 채	11,000	-	11,000	-	-
국 비	53,500	53,500	-	-	-
시 도 비	24,667	-	4,700	19,967	-
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ ‘15년 : 1,2호선 괴정역등 11역 안전문 설치완료

○ ‘16. 4. : 1,2호선 신평역등 10역 안전문 설치완료

○ ‘16. 6. :2호선 장산역등 11역 안전문 설치완료

○ ‘16.12. :부대시설 설치완료(해운대 역등 7개역)

※구조체는 ‘16년6월 완료(정상가동)

□ 향후계획

○ 승강장안전문(구조체) 설치완료 후 후속사업인 승강장 천정판 교체, 소방

설비 설치, 환기설비 개선 등 부대공사 진행 중(잔여 25개 역사)

사업명

군 수영부두 대체시설 건립

담당자

해운항만과 안종철(☎888-5294)

□ 사업목적 및 필요성

○ ‘05년 APEC 정상회의 후 ’08.8.26 우리시와 국군수송사령부간 동백섬

군수영부두 이전 합의에 따른 대체시설 건립 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년∼2017년

○ 위 치 : 진해구 일원(진해 탄약부두), 남구 감만동 일원(항만운영단)

○ 규 모 : 건물 3동(5,557.78㎡, 공작물 3식)

- 진  해 : 소선박부두, 통합생활관, 간부숙소, 해상방책선, 방호초소

- 감만동 : 정비고

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 23,045백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	23,045	10,395	8,650	4,000	-
지 방 채	7,000	-	7,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	16,045	10,395	1,650	4,000	-
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ ’17. 6. : 소선박부두, 동원생활관 등 대체시설 준공

○ ’17. 7. : 감정평가사 추천 의뢰(부산시→국방부)

□ 향후계획

○ ’17. 8. : 감정평가사 선정 및 감평평가 실시(기부 및 양여재산)

○ ’17. 9. : 아파트 매입(28평형 8세대, 32평형 3세대)

○ ’17.12. : 기부 및 양여절차 완료 및 정산

□ 사업변경 내역

○ ‘17. 5. : 총사업비 변경[21,745백만원(실시설계)→23,045백만원(아파트 실거래가 반영 등)]