2018 재정공시		특수공시 대상사업

(단위 : 억원)

연번	사 업 명	사업개요	총사업비	담당부서명 (담당자)
1	청년창조발전소 조성	․ 2015~2018 ․ 청년창조발전소 조성(3개소)	113	청년정책 담당관 (정찬규)
2	덕천동~아시아드 주경기장간 도로개설	․ 2013~2020 ․ 도로개설 L=4.37㎞, B=20~45m	1,399	도로계획과 (권성기)
3	을숙도대교~장림고개간 지하차도 건설	․ 2014~2020 ․ 도로개설 L=2.31㎞, B=21~35m	1,793	도로계획과 (김광훈)
4	천마산터널 건설(민자)	․ 2007~2018 ․ 도로개설 L=3.28㎞, B=19~46m	3,065	도로계획과 (박성득)
5	산성터널 건설(민자)	․ 2012~2018 ․ 도로개설 L=5.62㎞, B=27~42m	3,004	도로계획과 (김상석)
6	수정터널 상부공간 연결 공원화사업	․ 2014~2018 ․ 연면적 9,000㎡ ․ 인공지반, 공동체정원(녹지) 조성 등	228	공원운영과 (양기조)
7	시민친화적 구덕운동장 재개발	․ 2015~2018 ․ 생활체육공원 조성 35,643㎡	105	체육진흥과 (이길근)
8	부산 그린레일웨이 조성사업	․ 2014~2018 ․ L=9.8㎞, B=8~18m	316	철도물류과 (박순달)
9	한국신발관 건립	․ 2015~2018 ․ 부지 2,645㎡, 연면적 4,141㎡	119	융복합주력 산업과 (김인재)
10	해양융복합 소재 산업화사업	․ 2016~2018 ․ 부지 5,686㎡, 연면적 6,319㎡	888	융복합주력 산업과 (김영민)
11	조선해양기자재 성능고도화 기반구축	․ 2014~2019 ․ 부지 17,679㎡, 연면적 7,870㎡ ․ 기업지원 국제공인시험체계 구축	333	융복합주력 산업과 (이영재)
12	부산글로벌테크비즈센터 건립	․ 2014~2018 ․ 부지 19,188㎡, 연면적 12,965㎡ ․ 특구본부, 연구소 등 입주시설	383	과학서비스 금융과 (황나영)
13	메가와트급 ESS연계 태양광발전소 준공	․ 2017~2018 ․ ESS(에너지저장장치)연계 태양광 발전사업	74	클린에너지 산업과 (이영진)
14	수영만 자연재해위험개선지구 정비사업	․ 2017~2021 ․ 해일피해 방제시설 등	790	해운항만과 (조태용)
15	자갈치 글로벌 수산명소화 조성	․ 2014~2018 ․ 부지 3,469.6㎡, 연면적 2,288㎡	93	수산유통가공과 (오 세 호)

1. 청년창조발전소 조성

사업목적

○ 지역 청년 인재들의 새로운 아이디어 펼칠수 있는 청년창조공간 제공하여 청년 주도의 문화·예술·교육학습 등 다양한 콘텐츠 생산·소비로 지역 활성화 기여

사업개요

○  3대 핵심클러스터 조성 (‘15.～’18년)

- 동의대 대학가(가야동) : 디자인콘텐츠 특화

- 부산대 대학가(장전동) : 청년문화와 예술콘텐츠 연계 창업특화

- 경성대·부경대 대학가(대연동) : UN특구연계 공연·예술 청년문화 특화

추진상황

○ ‘17. 3. : 청년창조발전소 ‘Design Spring’ 개소 (34.9억원)

▹ 부산진구 대학로36번길 10 (☏893-0944)

⦁ 다목적강당(B1), 카페(1층), 디자인도서실(2층), 3D프린터교육실(3층) 등

○ ‘17. 12. : 청년창조발전소 ‘꿈터플러스’ (39억원)

▹ 금정구 금정로 63-1 (☏710-4920)

⦁ 카페(1층), 강의실(2층), 코워킹스페이스(3, 4층), 다목적강당(5층) 등

○ ‘17. 12. : 청년창조발전소 ‘고고씽 Job’ (39억원)

▹ 남구 용소로46번길 7 (☏611-1717)

⦁ 에코창작실(B1), 카페(1층), 디지털출판(2층), 소극장(3층), 강의실(4층) 등

기대효과

○ 문화·예술·산업·복지·창업 등의 혁신적인 청년창조발전소

가동으로 청년을 위한 복합서비스 제공

☎ 문의 / 부산광역시 청년정책담당관 888-1104

□ 현장사진

청년창조발전소‘고고씽Job’	청년창조발전소‘꿈터플러스’

청년창조발전소‘디자인 스프링’

2. 덕천동~아시아드 주경기장간 도로개설

사업목적

○ 서부산권의 본격적인 개발로 인한 교통량 급증으로 동서 연결도로인 만덕1‧2터널 지정체가 극심하므로 지역 간 연결도로망 확충을 통한 교통 분산 필요

사업개요

○ 위    치 : 북구 만덕동 ~ 연제구 거제동

○ 사업기간 : 2013년 ~ 2020년

○ 규    모 : 도로건설 L=4,370m, B=20~45m

○ 총사업비 : 1,399억원(국비609, 시비790)

추진상황

○ ‘12.  1. : 국토교통부 제2차 대도시권 교통 혼잡도로 지정(민자)

○ ‘12.  6. : 사업추진 방안 결정 ▹ 재정사업으로 추진

○ ‘13.  8. : 타당성 재조사(PIMAC주관)

○ ‘14.  9. : 타당성 재조사용역 완료(B/C 1.13, AHP=0.513)

○ ‘15. 12. : 실시설계용역 완료

○ ‘16.  1. : 공사 착공

○ ‘18.  7. : 시․종점부 터널 양방향 굴착(현공정 16.2%)

○ ‘20. 12. : 준공 예정

기대효과

○ 동‧서간 연결 간선도로망 확충으로 만성적인 교통체증 해소

○ 교통 분산 효과를 통한 원활한 소통으로 지역 발전 기대

☎ 문의 / 부산광역시 도로계획과 888-2716

□ 위치도

<총 사업개요>

○ 위치 : 북구 덕천동 ~ 연제구 거제동

○ 사업규모 L=4,730m, B=20~45m

○ 사업비 : 138,772백만원

(공사:112,238, 보상:20,073, 기타:6,461)

○ 사업기간 : 2013~2020

<2016년 이전>

○ 사업규모

- 보상 및 실시설계,  도로건설 L=707m

○ 사업비 : 29,200백만원

(공사 7,805, 보상 17,550, 기타 3,845)

<2017년 투자>

○ 사업규모

- 도로건설 L=253m, B=20~45m

○ 사업비 : 10,500백만원

(공사 8,987, 보상 1,000, 기타 513)

<2018년 투자>

○ 사업규모

- 도로건설 L=240m, B=20~45m

○ 사업비 : 8,800백만원

(공사 7,277, 보상 1,523, 기타 -)

<2019년 이후투자>

○ 사업규모

- 도로건설 L=3,170m, B=20~45m

○ 사업비 : 90,272백만원

(공사 88,169, 보상 - , 기타 2,103)

구 분	내 용
	2016 이전
	2017 투자
	2018 투자
	2019 이후투자

□ 현장사진

- 만덕측                                   - 거제측

3. 을숙도대교~장림고개간 지하차도 건설

사업목적

○ 항만배후도로 및 내‧외부 순환도로 수송체계 구축

사업개요

○ 위    치 : 사하구 신평동(을숙도대교) ~ 구평동(장림고개)

○ 규    모 : 도로건설 L=2.31㎞, B=21.7~35m

○ 사업기간 : 2014 ~ 2020

○ 총사업비 : 1,793억원(국비793, 시비1,000)

추진상황

○ ‘13.  2. ~ 12. : 예비타당성조사 시행(KDI)

○ ‘15. 12. : 기본 및 실시설계 용역 준공

○ ‘16.  6. : 총사업비 확정 (당초 1,639억원 → 변경 1,911억원)

○ ‘16. 12. : 공사 착공 (1차 : ‘16.12.24. ~ ‘17.12.23. 공사비 : 64억원)

○ ‘17.  5. : 총사업비 조정 (낙찰차액 자율조정 : 1,911억원→1,793억원)

○ ‘17.  6. : 공사 착공

○ ‘18.  7. : 복공판 설치 공사 중(현공정 18.4%)

○ ‘20. 12. : 준공 예정

기대효과

○ 항만배후도로 확충으로 내‧외부 순환도로망 확충을 통하여 만성적인 교통체증 해소

○ 교통흐름 개선을 통한 원활한 소통으로 물류비 절감 등으로 항만 경쟁력 강화

☎ 문의 / 부산광역시 도로계획과 888-2724

□ 위치도

구 분	내 용
	2016 이전
	2017 투자
	2018 투자
	2019 이후투자

<2018년 투자>

○ 사업규모

- 도로건설 L=300m, B=21.7~35m

○ 사업비 : 17,652백만원

(공사 17,390, 보상 - , 기타 262)

<2018년 이후 투자>

○ 사업규모

- 도로건설 L=1,590m, B=21.7~35m

○ 사업비 : 115,868백만원

(공사 112,445, 보상 - , 기타 3,423)

<2017년 투자>

○ 사업규모

- 도로건설 L=320m, B=21.7~35m

○ 사업비 : 26,002백만원

(공사 24,937, 보상 5, 기타 1,060)

<총 사업개요>

○ 위치 : 사하구 신평동~ 사하구 구평동

○ 사업규모

- 도로건설 L=2,310m, B=21.7~35m

○ 사업비 : 179,285백만원

(공사:162,732 보상:6,005 기타:10,548)

○ 공사기간 : 2014.~2020.

<2016년 이전 투자>

○ 사업규모

- 도로건설 L=100m, 설계, 보상

○ 사업비 : 19,763백만원

(공사 7,960, 보상 6,000, 기타 5,803)

□ 현장사진

- 시점부 지하차도(공사시점~터널시점)

- 종점부 지하차도 (터널종점~공사종점)

4. 천마산터널 건설(민자)

사업목적

○ 항만배후도로 및 내‧외부 순환도로 수송체계 구축

사업개요

○ 위    치 : 서구 암남동(남항대교) ~ 사하구 구평동

○ 규    모 : 도로건설 L=3.28㎞, B=19~46m

○ 사업기간 : 2007 ~ 2018

○ 총사업비 : 3,065억원(국비299, 시비967, 민자1,799)

추진상황

○ ‘11.  4. : 민간투자사업 실시협약 체결

○ ‘12.  7. : 천마산터널 민간투자사업 실시계획 승인 고시

○ ‘12. 10. : 공사착공

○ ‘13.  9. : 실시계획 변경 고시(천연가스발전본부 내 노선 변경)

○ ‘16. 10. : 실시계획 변경 고시(공사기간 26개월 연장)

○ ‘18.  7. : 터널 내부 타일, 구조물 시공 중(현공정 84%)

○ ‘18. 12. : 준공 예정

기대효과

○ 항만배후도로 확충으로 내‧외부 순환도로망 확충을 통하여 만성적인 교통체증 해소

○ 교통흐름 개선을 통한 원활한 소통으로 물류비 절감 등으로 항만 경쟁력 강화

☎ 문의 / 부산광역시 도로계획과 888-2725

□ 위치도

<2018년 투자요구>

○ 사업규모

- 도로건설 L=700m, B=4차로

○ 사업비 : 61,600백만원

(국비 - , 시비 22,200, 기타 39,400)

구 분	내 용
	2016 이전
	2017 투자
	2018 투자요구
	2019 이후투자

<총 사업개요>

○ 위치 : 서구 암남동~사하구 구평동

○ 사업규모 L=3,280m, B=4차로

○ 사업비 : 306,500백만원

(국비 29,900, 시비 96,700, 기타 179,900)

○ 사업기간 : 2007~2018

<2016년 이전>

○ 사업규모

- 도로건설 L=1,620m, B=4차로, 보상1식

○ 사업비 : 178,000백만원

(국비 29,900, 시비 47,600, 기타 100,500)

<2017년 투자>

○ 사업규모

- 도로건설 L=760m, B=4차로

○ 사업비 : 52,500백만원

(국비 - , 시비 12,500, 기타 40,000)

<2019년 이후투자>

○ 사업규모

- 도로건설 L=200m, B=4차로

○ 사업비 : 14,400백만원

(국비: - , 시비 14,400, 기타 - )

□ 현장사진

- 서구측(남항대교 접속부)

4. 산성터널 건설(민자)

사업목적

○ 서부경남과 부산 동부권을 연결하는 광역교통망 구축

사업개요

○ 위    치 : 북구 화명동 ~ 금정구 장전동

○ 규    모 : 도로건설 L=5.62㎞, B=27~42m

○ 사업기간 : 2012 ~ 2018

○ 총사업비 : 3,004억원(국비164, 시비425, 민자2,415)

추진상황

○ ’10.  3. : 기본 및 실시설계 완료

○ ’12.  4. : 실시협약 체결

○ ’13.  4. : 실시계획 승인 고시(부산광역시 고시 제2013-142호)

○ ’13.  8. : 공사착공

○ ’16.  8. : 터널굴진(관통) 4,873m 완료

○ ’18.  7. : 터널 방․배수, 라이닝, 부속시설 시공(현공정 92%)

○ ‘18.  9. : 준공 예정

기대효과

○ 동‧서간 연결 간선도로망 확충으로 만성적인 교통체증 해소

○ 교통 분산 효과를 통한 원활한 소통으로 지역 발전 기대

☎ 문의 / 부산광역시 도로계획과 888-2722

□ 위치도

<총 사업개요>

○ 위치 : 북구 화명동~금정구 장전동

○ 사업규모 L=5,620m, B=4차로

○ 사업비 : 300,400백만원

(국비 16,400, 시비 42,500, 기타 241,500)

○ 사업기간 : 2012~2018

<2016년 이전>

○ 사업규모

- 도로건설 : L=3,500m, B=4차로, 보상1식

○ 사업비 : 200,148백만원

(국비 7,018, 시비 19,600, 기타 173,470)

<2017년 투자>

○ 사업규모

- 도로건설 L=1,400m, B=4차로

○ 사업비 : 64,380백만원

(국비 4,700, 시비 7,700, 기타 51,980)

구 분	내 용
	2016 이전
	2017 투자
	2018 투자
	2019 이후투자

<2019년 이후투자>

○ 사업규모

- 보상 1식

○ 사업비 : 6,440백만원

(국비: - , 시비 6,440, 기타 - )

<2018년 투자>

○ 사업규모

- 도로건설 L=720m, B=4차로

○ 사업비 : 29,432백만원

(국비 4,682, 시비 8,700, 기타 16,050)

□ 현장사진

- 터널 시점부(화명측)

- 터널내부

6. 수정터널 상부공간 연결 공원화사업

사업목적

ㅇ 2001. 8월 수정터널 개통으로 단절된 지역생활권 복원 및 도심재생

ㅇ 부족한 공원 확충 및 주민참여 커뮤니티 공간 제공으로 녹색문화 확산

사업개요

ㅇ 사업규모 : A=9,000m²(L=180m, W=40 ~ 70m)

ㅇ 사업기간 : 2014. 2. ~ 2018. 12.

ㅇ 총사업비 : 228.19억원(국비 102.19, 시비 123.6, 구비 2.4)

※ 국토부 도시활력증진지역 개발사업 : 국비 50%, 지방비 50%

ㅇ 사업내용

▷ 인공지반(복개구조물) 6,443m², 커뮤니티센터(소 회의실, 화장실 등), 방음시설

▷ 멀티프라자(놀이터, 주민운동시설 등), 공동체정원(녹지) 및 주차장 등

추진상황

ㅇ‘11. 12. : 입체도시공원 타당성 용역(국토교통부, B/C=1.27)

ㅇ‘13.   6. : 국토교통부 도시활력증진지역 개발사업 대상지 선정

ㅇ‘14.  8. : 실시설계용역 착수 (‘14. 8. 19 ~ ‘15. 12. 15 )

ㅇ‘15.  7. : 설계의 경제성검토(VE) 완료(‘15.  10. 건설기술심의)

ㅇ‘16.  4. : 토목공사 착공

ㅇ‘17.  5. : 구조물 설치완료, 토목공사(2차) 및 전기공사 발주

ㅇ‘18.  5. : 건축공사 착공

기대효과

ㅇ 터널 상부 녹화를 통하여 지역환경개선 및 주민휴게공간 조성

☎ 문의 / 부산광역시 공원운영과 888-3814

□ 위치도

□ 조감도

7. 시민친화적 구덕운동장 재개발

사업목적

ㅇ 노후화가 진행된 구덕야구장 및 실내체육관을 철거하여 다수

주민이 이용가능 한 시민친화형 생활체육공원 조성

사업개요

ㅇ 위    치 : 서구 서대신동 3가 210-1번지

ㅇ 규    모 : 시민친화형 생활체육공원 조성(35,643㎡)

- 풋살장(2), 테니스(5), 게이트볼(2), 다목적(5), 농구(1), 주차장 200면

ㅇ 사업기간 : 2015 ~ 2018(3개년)

ㅇ 사 업 비 : 105억원 (공사비 99, 기타6)

추진상황 및 계획

ㅇ ’14.  8. ~ ’15. 1. : 구덕운동장 활용방안 연구(BDI)

ㅇ ’15.  8. : 구덕운동장 재개발 방침 결정

ㅇ ’15. 10. : 투자심사, 공유재산관리계획 수립

ㅇ ’16.  3. ~ ’17. 3. : 기본 및 실시설계

ㅇ ’17.  6.  : 공사착수

ㅇ ’18.  9.  : 조성완료

ㅇ ’18. 10.  : 개장

기대효과

ㅇ 시민들에게 체육공원 제공을 통한 삶의 질 개선 및 건강한 부산 기대

☎ 문의 / 부산광역시 체육진흥과 888-3442

□ 위치도

□ 조성계획

8. 부산 그린레일웨이 조성사업

사업목적

○ 해운대관광특구와 수려한 해안절경을 연계하는 관광벨트 및 주민 휴게공간 조성으로 국내외 관광객들의 볼거리 제공 및 시민의 삶의 질 향상

사업개요

○ 위    치 : 해운대구 올림픽교차로~동부산관광단지 경계

○ 기    간 : 2014∼2018년

○ 규    모 : L=9.8km, B=8~18m

○ 주요시설 : 산책로, 전망대, 쉼터, 조경·녹지 등

○ 총사업비 : 316억원(국비 100, 시비 216)

추진상황

○ ‘15. 9. : 1차공사(올림픽교차로~부산기계공고, L=1.6km) 착공

○ ‘16. 6. : 2차공사(부산기계공고~동부산관광단지, L=3.4km) 착공

○ ‘16.12. : 1차공사(올림픽교차로~부산기계공고, L=1.6km) 준공

○ ‘17.12. : 2차공사(부산기계공고~동부산관광단지, L=3.4km) 준공

3차공사(미포~舊송정역, L=4.8km) 착공

○ ‘18.12. : 3차공사(미포~舊송정역, L=4.8km) 준공(예정)

기대효과

○ 80여년 동안 지역단절 등 철도 인근지역 민원해소 및 삶의 질 향상

○ 해안권 관광인프라 확충으로 지역경제 활성화 기여

☎ 문의 / 부산광역시 철도시설과 888-4094

□ 위치도

□ 조감도

9. 한국신발관 건립

사업목적

○ 신발산업 인프라와 기술력 전시‧홍보로 글로벌바이어 유치

○ 신발역사를 상징하고 글로벌 브랜드와 경쟁할 수 있는 자신감 부여

사업개요

○ 위    치 : 부산광역시 부산진구 백양대로 227(개금동)

○ 건립규모 : 대지 2,644.6㎡, 연면적 4,141.4㎡, 지하 1층, 지상 7층

○ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년

○ 사 업 비 : 119억원(국비 59.5, 시비 50, 민자 9.5)

- 건물매입비 75,  공사비 29,  자료수집 9.5, 부대경비 5.5

○ 주요시설 : 멀티홍보관, 역사전시관, 비즈니스관, 인력양성관,
신발업체 임대사무실 등

추진상황

○ ‘15.  8월    건립지 선정

○ ‘15.  9월    부산시 의회 공유재산취득심의

○ ‘15. 12월    건물매입계약(한국토지주택공사 사옥)

○ ‘16. 12월    공사착공

○ ‘17.  5월    관리위탁 계약체결(부산시↔부산경제진흥원)

○ ‘18.  1월    공사 준공

○ ‘18.  2월    ’한국신발관(K-슈즈센터)‘ 개관

기대효과

○ 부산권 주력산업(기계, 자동차, 조선 등)의 공정 혁신, 생산성 향상 등을 통한 고부가가치화

☎ 문의 / 부산광역시 융복합주력산업과 888-4622

□ 위치도

한국신발관

□ 조감도

10. 해양융복합 소재 산업화사업

사업목적

○ 新해양시대 트렌드인 고성능화·경량화 해양융복합소재 개발지역거점 마련 및 중소기업 R&D 지원을 위한 헤드쿼터 구축

사업개요

○ 위    치 : 강서구 미음동 1537-1(미음 R&D 허브단지 내)

○ 규    모 : 부지 5,686.3㎡, 연면적 6,319㎡(본관, 시험동)

○ 사업내용

- 해양융복합소재 산업 활성화를 위한 기반구축(부산, 전남)

- 조선, 해양플랜트, 구조물 분야 복합소재 개발 R&D(6개 과제)

○ 총사업비 : 888.4억원 ▹기반구축 350억원, R&D사업비 538.4억원

추진상황

○ '14.11. : 기획재정부, 예비타당성조사 통과(한국과학기술기획평가원)

○ '15. 1. : 산업통상자원부, 전담기관 선정(한국산업기술평가관리원)

○ '15. 4. : 사업 공고, 사업추진 주관기관 지정, 지방재정 투자심사(중앙)

○ '16.12. : 해양융복합소재 센터 건축공사 착공

○ '17. 1. : 고분자융복합소재 센터 건축공사 착공

○ '17. 8. : 고분자융복합소재 센터 건축공사 준공

○ '18. 2. : 해양융복합소재 센터 건축공사 준공

기대효과

○ 해양 소재산업 육성을 통해 미래 성장 동력 창출 및 혁신소재 중심 산업구조 개편

☎ 문의 / 부산광역시 융복합주력산업과 888-4627

□ 위치도

□ 현장사진

12. 조선해양기자재 성능고도화 기반구축

사업목적

○ 국제규제 대응 기업 지원 국제공인시험체계 구축

사업개요

○ 위치/면적 : 강서구 미음R&D허브단지 / 17,679.8㎡(연면적 7,870.68㎡)

○ 사업 기간 : '14 ∼ '19(6년)

○ 사 업  비 : 333억원(국비 190, 시비 133, 민자 10)

↳ 장비, 전기  ↳ 부지(93), 건축  ↳ 건축

○ 주관 기관 : 산업통상자원부(전담기관 : 한국산업기술진흥원 KIAT)

○ 시행 기관 : (재)한국조선해양기자재연구원(KOMERI)*

* 산업기술혁신촉진법 규정에 의거 산업부로부터 설립허가를 받는 전문생산기술연구소

추진상황

○ '14. 05 : 기반구축사업 시행계획 주관기관 정책지정 확정 통보

○ '14. 10 : (행자부) 투자심사, 부동산 시소유 조건부 승인

○ '14. 12 : (시의회) 공유재산 취득승인 및 시비예산 확정

○ '15. 02 : 부지매매계약 체결(부산시↔부산도시공사)

○ '15. 07 : 공사착공

○ '16. 06 : 센터건축 준공

○ '17. 04 : 장비구축 4종

○ '17. 12 : 국비확보에 따른 순차적 장비구축 9종

○ '18. 06 : 국비확보에 따른 순차적 장비구축 4종(누계 17종)

기대효과

○ 극지용 선박 및 글로벌 환경규제 대응하는 기자재 개발 지원

○ 기업 공동활용, 공인 시험인증 통합 지원체계 구축

☎ 문의 / 부산광역시 융복합주력산업과 888-4651

□ 위치도

□ 배치도

12. 부산글로벌테크비즈센터 건립

사업목적

○ 특구의 R&BD 허브 및 산학연 교류협력 활성화 등 연구기능 및 비즈니스 기능이 결합된 기술사업화 종합지원시설 건립

사업개요

○ 위    치 : 강서구 미음R&D허브단지(부산특구 R&D융합지구 내)

○ 사업규모 : 부지 19,188㎡, 연면적 12,965㎡(지상 9층)

- 부산특구본부, 기술사업화기업, 전문연구소 등 입주시설, 국제회의장

○ 총사업비  : 38,338백만원(국비 19,169, 시비 19,169)

○ 사업기간  : 2014. 1. ~ 2018. 8.

추진상황

○ ’14. 7.~10. : 총사업비 확정(392억원)

○ ’15. 1. ~ 6. : 부지매입 계약, 건축설계 공고(3~6월)

○ ’15. 7. ~ ’16. 8. : 기본 및 실시설계 용역

○ ’16. 8. ~ 11.    : 설계 및 공사원가 검토(조달청), 계약심의(市)

○ ’16. 12.    : 공사착공

○ ’17. 3.     : 총사업비 및 사업기간 조정(시설규모조정 16,732㎡→12,965㎡)

▻ 사업비: 39,200백만원→38,338백만원, 사업기간: ‘14∼‘17→‘14∼‘18(1년 연장)

○ ’18. 8.     : 공사 준공(예정)

기대효과

○ 조선해양플랜트 산업의 국가 R&BD 허브 내 거점역할을 수행하는

랜드마크 조성으로 국제비즈니스 및 글로벌 네트워크 활성화 촉진

☎ 문의 / 부산광역시 과학서비스금융과 888-4517

□ 위치도

□ 조감도

13. 메가와트급 ESS연계 태양광발전소 준공

사업목적

○ 부산시 스마트그리드 확산사업으로 화명정수장 및 LS산전

부산공장에“ESS(에너지저장장치)연계 태양광 발전소”설치로

친환경 전기 연간 2,450MWh 발전

사업개요

○ 사업기간 : '17. 6월 ∼ '18. 3월(10개월)

○ 사 업 비 :  74.3억원(시비 6, 민자 68.3)

○ 사업내용 :  ESS(에너지저장장치)연계 태양광 발전사업

- 화명정수장 : ESS(3MWh)연계한 태양광(1MW)발전소 구축

- LS산전 부산공장 : ESS(2.7MWh)연계한 태양광(970kW)발전소 구축

○ 사업위치

- 화명정수장 : 침전지 상부, 정수지 일부, 활성탄동 및 펌프동 옥상

- LS산전 부산공장 : 초고압변압기동, UT동, 사무동

○ 사 업 자 : LS산전

추진상황

○ '15. 6월 : 스마트그리드 확산사업 예타 통과

○ '15.12월 : 산업부 주관 MOU 체결

○ '18. 3월 : 1차년도 사업수행 및 완료

기대효과

○ 연간매출(한전에 매전) : 7억원 □ 연간 발전량 2,450MWh

○ 화명정수장 침전지 상부 태양광 설치(차광효과)로 녹조현상 예방

☎ 문의 / 부산광역시 클린에너지산업과 888-4672

ESS연계 태양광 준공 사진

화명정수장 (ESS연계 태양광)

LS산전 부산공장 (ESS연계 태양광)

14. 수영만 자연재해위험개선지구 정비사업

사업목적

○ 최근 이상기후 발생, 해수면 상승과 슈퍼태풍에 따른 폭풍해일이  발생하고 있어, 대규모 주거·상가가 밀집한 해운대 마린시티  일원에 체계적이고 항구적인 방재대책시설 시급

사업개요 ▷ 2017∼2021

○ 사업위치 : 해운대구 우3동 마린시티 전면 해상

○ 사업내용 : 해일피해 방재시설 등(방파제 L=650m, 호안 L=780m)

○ 총사업비 : 790억원(국비 : 50%)

추진상황 및 계획

○ ‘15.04.~`17.06.  부산 연안방재대책수립용역(부산시)

- (마린시티) 해일 위험 우선순위 결과 1위→방재시설 추진 방침결정(시장,‘15. 8.)

○‘16.12.  자연재해위험개선지구 지정(’16.12.1. 고시)

○ ‘17.04.  기본 및 실시설계용역 발주계획 보고(시장, 4.25)

○ ‘17.09.  용역계약체결(9.1) ※ 계약자 : ㈜혜인이엔씨 (낙찰액 : 1,421백만원, 80%)

○ ‘17.09.  용역 착수보고(9.27) ※ ’18.06.30, 현재 용역 추진공정 : 75%

○ ‘17.12.  설계자문회의 개최(12.26, 교수, 전문가 등 자문위원 10명)

○ ‘18.05.  중간보고회 개최(05.18, 교수, 전문가 등 16명)

○ ‘18.08.~12.  자문회의(2차), 주민설명회, 최종보고(준공, 12월)

○ ‘18.12 .  공사발주(착수 ’19.3, 준공, ’21.12)

기대효과

○ 해일피해 등 자연재해로부터 인명, 재산보호 및 시민생활 편의 기여

○ 마린시티 일원 명품 해양관광레저 기반조성으로 新 관광명소 창출

☎ 문의 / 부산광역시 해양레저과  888-5342

	위치 및 계획도

15. 자갈치 글로벌 수산명소화 조성

사업목적

○ 인근 관광자원과 연계, 국제적 명성에 걸맞은 해양수산복합공간 조성

○ 국내 최대 수산관광지인 자갈치일원의 위생 및 식품안전성강화

사업개요

○ 위    치 : 부산광역시 중구 자갈치 해안로 52일원

○ 사업기간 : 2014년～2018년

○ 규    모 : 부지 3,469.6㎡, 연면적 2,288㎡

○ 총사업비 : 93억원(국비 50%, 시비 50%)

추진상황

○ ‘15. 12.  입주예정 노점상 전수조사 1차

○ '15. 12.  기본 및 실시설계 용역 착수

○ '16.  3.  입주예정 노점상 전수조사 2차

○ '16. 10.  기본 및 실시설계 완료

○ '16. 11.  사업계획 변경(총사업비 결정) 승인(해양수산부□시)     - 총사업비 조정 : 5,000백만원→9,345백만원(실시설계 용역결과)

- 위생･해수배관, 해수인입시설, 점포별 인입배선 추가반영

○ ‘16. 12.  건축공사 계약(’16.12.09)

○ ‘17.  4.  공사 착공 (’17. 4. 9.)

기대효과

○ 부산 원도심권 중심인 남항 개발을 통한 원도심 재창조

○ 수산시장 현대화로 자갈치일원 등 주변 지역경제 활성화

☎ 문의 / 부산광역시 수산유통가공과 888-5422

□ 위치도

□ 조감도