2017년 재정공시		특수공시 대상사업

(단위 : 억원)

연번	사 업 명	사 업 개 요	총사업비	부 서 명 (담당자)
1	부산영화체험박물관 건립	․ 2008~2017 ․ 부지 4,449㎡, 연면적 11,302㎡ ․ 영화체험, 교육 등	392	영상콘텐츠산업과 (정창기)
2	부산도시경제플랫폼 구축사업	․ 2014~2018 ․ 지식혁신플랫폼, 도시민박촌 등	500	도시재생과 (최연식)
3	청년창조발전소 조성	․ 2015~2018 ․ 청년창조발전소 조성(3개소)	117	도시재생과 (정찬규)
4	행복한 도시어촌 청사포 만들기	․ 2009~2017 ․ 수변경관, 가로경관, 마을경관 조성	133	도시경관과 (배혜연)
5	부산글로벌테크비즈센터 건립	․ 2014~2018 ․ 부지 19,188㎡, 연면적 12,965㎡ ․ 특구본부, 연구소 등 입주시설	383	연구개발과 (성종훈)
6	부산지식산업센터 건립	· 2012~2016 ․ 부지 9,900㎡, 연면적 16,227㎡ (지하1/지상6층)	300	창업지원과 (조윤서)
7	산성터널 건설 (민자)	․ 2008~2018 ․ 도로개설 L=5.62㎞, B=4차로	3,004	도로계획과 (김상석)
8	천마산터널 건설 (민자)	2007~2018 ․L=3.28m, B=4차로	3,065	도로계획과 (이창봉)
9	도시철도 1호선 연장(다대선) 건설	․ 2006~2017 ․ L=7.98㎞, 6개역, 차량기지 1개소	9,589	철도시설과 (황현기)
10	노포 화물차 공영차고지 조성	․ 2009~2016 ․ 부지 42,794㎡, 주차 218면, 부대시설	269	교통관리과 (임상빈)

연번	사 업 명	사업개요	총사업비	부 서 명 (담당자)
11	레이저 가공기술 산업화 지원센터	․ 2012~2018 ․ 부지 6,602㎡, 연면적 3,689㎡ ․ 장비구축 40종	281	기간산업과 (박종한)
12	조선해양기자재 성능고도화 기반구축	․ 2014~2018 ․ 부지 17,679㎡, 연면적 7,870㎡ ․ 기업지원 국제공인시험체계 구축	333	기간산업과 (장지은)
13	천체투영시스템 구축	․ 2016 ․ 연면적 250㎡ ․ 천체투영관 구축	10	금련산청소년수련원 (김대수)
14	수정터널 상부공간 연결 공원화사업	․ 2014~2018 ․ 연면적 9,000㎡ ․ 인공지반, 공동체정원(녹지) 조성 등	233	공원운영과 (양기조)
15	자갈치 글로벌 수산명소화 조성	․ 2014~2018 ․ 부지 3,469㎡, 연면적 2,288㎡	93	수산유통가공과 (오세호)

1. 부산영화체험박물관 건립

사업목적

ㅇ 부산 영화․영상 중심도시로서의 위상제고를 위한 영상전문시설 건설

ㅇ 중구 BIFF광장과의 연계성, 원도심 개발을 고려한 문화시설 확충

사업개요

ㅇ 소 재 지 : 중구 대청로 126번길 12 (동광동, 용두산공원 내)

ㅇ 사업기간 : 2008.1 ~  2017. 3

ㅇ 건립규모 : 부지 4,449㎡, 건축면적 1,809㎡, 연면적 11,302㎡

ㅇ 사업방식 : 임대형 민간투자사업 방식 (`09.7.31 정부고시사업)

ㅇ 사업시행자 : ㈜부산영화박물관(SPC) ▷ 시공사 : 한진중공업

ㅇ 총민간투자비 : 39,266백만원 ※ `09.7.31 고시당시 331억원

추진상황

ㅇ ‘08. 1 : ’08년도 BTL사업 지정(문화체육관광부)

ㅇ ‘14. 4 : 실시협약 체결

ㅇ ‘15. 1 : 실시계획승인

ㅇ ‘15. 3 : 공사착공(공사기간 24개월)

ㅇ ‘17. 3 : 시설 준공 (3.31자)

ㅇ ‘17. 7. 4 : 부산영화체험박물관 정식개관

기대효과

ㅇ 영화제작 체험, 교육을 통해 영화저변인구 확대 및 관광시설 역할 기대

☎ 문의 / 부산광역시 영상콘텐츠산업과 888-5136

□ 위치도

□ 조감도

2. 부산도시경제플랫폼 구축사업

사업목적

○ 구도심의 인구감소, 산업이탈, 도시환경 노후, 공동화 극복을 위해 부산역 광장~상업지역~주거지역을 연계한 일자리창출기반 마련으로 구도심 일원의 활력 회복

사업개요

○ 위    치 : 초량 1·2·3·6동 3.12㎢

○ 기    간 : 2014∼2018년(준공시기 미도래로 1년 연장)

○ 규    모 : 11개 단위사업 추진

○ 주요시설 : 지식혁신플랫폼, 도시민박촌(이바구캠프), 공영주차장 등

○ 총사업비 : 500억원(국비 250, 시비 250)

추진상황

○ ‘16. 10. : 도시민박촌(이바구캠프) 개촌

○ ‘17.  3. : 부산역 광장 지식혁신플랫폼 공사 착공

(’18. 9월 준공예정)

기대효과

○ 북항재개발지와 구도심을 물리적으로 연결하여 보행자 중심으로 전환

○ 부산역 광장일원 지식혁신플랫폼은 4차 산업혁명의 전초기지로 역할

○ 상업지 일원에는 역사탐방로 등 문화관광 활성화 추진

○ 주거지 일원에는 마을기업 등 사회적경제를 통한 생활복지 향상

☎ 문의 / 부산광역시 도시재생과 888-4195

□ 위치도

□ 조감도

3. 청년창조발전소 조성

사업목적

○ 지역 청년 인재들의 새로운 아이디어 생산과 소비를 하는

창조공간 활용 및 대학가 도시활력과 청년들의 일자리 창출 등

지역경제 활성화 기여

사업개요

○ 1단계(‘15～’18년) : 3대 핵심클러스터 조성

- 동의대 대학가(가야동) : 산업디자인 특화

- 부산대 대학가(장전동) : 인디·인문학 등 융합형 창조콘텐츠

- 경성대·부경대 대학가(대연동) : UN특구 등 청년문화 특화

추진상황

○ ‘15. 7. : 청년창조발전소 가야동(동의대) 대학가 사업선정(39억)

-「디자인 스프링」설계용역(‘16.5∼9월), 리모델링(’16.10∼12월), 개소(‘17.3월)

○ ‘16. 6. : 청년창조발전소 장전동(부산대) 대학가 사업선정(39억)

-「G.톡톡S」계획수립(2월), 사업자 선정(6월), 설계공모(12월) * 개소 : ‘17.12월 예정

○ ‘17. 1. : 청년창조발전소 경성대·부경대 대학가 사업 시행

- 설계용역(‘17.상반기), 리모델링·장비구입(’17.하반기) * 개소 : ‘17.12월 예정

기대효과

○ 문화·예술·산업·복지·창업 등의 혁신적인 청년창조발전소

가동으로 선순환 하는 복합서비스 제공

○ 지역의 젊은 인재들이 양질의 일자리를 마련할 수 있는 특화된

공간으로 조성하고 지역역량, 지역문화, 지역경제의 생산과

소비의 거점으로 육성

☎ 문의 / 부산광역시 도시재생과 888-4155

□ 조감도

2016. 청년창조발전소 (G.톡톡S)

2015. 청년창조발전소 (디자인 스프링)

4. 행복한 도시어촌 청사포 만들기 사업

사업목적

○ 경제적 낙후와 인구감소로 소외되고 있는 도시어촌 마을에 대한 재생과 어업기능 쇠퇴로 훼손되고 있는 어촌마을 경관 치유

○ 마을의 균형발전, 문화관광 자원화, 정주환경 및 공공성 회복, 커뮤니티를 통한 지속가능한 도시어촌 마을 조성

사업개요

○ 위    치 : 해운대구 중2동 청사포 마을 일원

○ 사업기간 : 2009. 9 ~ 2017. 6. (9개년)

○ 사업내용 : 수변경관, 가로경관, 마을경관 개선사업 등

- 청사포마켓, 쌈지공원, 마을회관 건립, 공영주차장 건립 등

○ 사 업 비 : 133.52억원(국비 66.76, 시비 66.76)

추진상황

○ ’09. 9. : 국토부 『국토환경디자인 시범사업』 선정(최우수)

○ ’10. 3. : 마스터플랜 수립(청사포 일원)

○ ’10. 4. : MOU 체결 ▷ 부산광역시장＋국토교통부장관

○ ’11. 6.∼’11. 1.2 : 기본 및 실시설계

○ ’11. 12.∼’14. 2. : 1차 사업완료 ▷ 청사포마켓,마을옛길 정비 등

○ ’14. 4.∼’15. 4. : 2차 사업완료 ▷ 해송보도교 설치, 마을회관 건립 등

○ ’14. 7. : 사업계획 변경승인

(사 업 비) 182억 → 133.52억(△ 48.48억)

(제외사업) 요트계류시설, 등대경관브릿지, 마을공간 리모델링, 마을안내소

(추가사업) 해송보도교

○ ’15. 1.∼’15. 8. : 3차 사업완료 ▷ 해안도로 보행성 향상공사 등

○ ’15. 12. : 사업계획 변경승인

(사업기간) ‘09. 9 ~ ’15. 12 ⇒ ‘09. 9 ~ ’16. 12(1년 연장)

(제외사업) 동방파제 정비, 진입로 가로변 담장특화, 경로당 환경개선

(추가사업) 하늘전망대 설치(40억)

○ ’16. 9. : 사업계획 변경승인

(사업기간) ‘09. 9 ~ ’16. 12  ⇒ ‘09. 9 ~ ’17. 6 (6개월 연장)

○ ’17. 6. : 전체 사업완료  ▷ 하늘전망대 설치 등

※ 2017 대한민국 국토경관디자인대전 대상 수상 ▷ 대통령 표창(‘17. 6.)

기대효과

○ 어촌마을의 보편적 재생 모델 제공, 도시어촌의 가치 재발견, 청사포 공간의 치유·회복, 지속가능한 어촌마을 도시공동체 회복

☎ 문의 / 부산광역시 도시경관과 888-4336

□ 위치도

□ 현장사진

〈1차사업〉

청사포 마켓 건립

망부송 역사자원 정비

버스정류장 쉼터조성

쌈지공원 조성

크레인 색채정비

손공 장군비 역사자원 정비

마을옛길 정비

1번		2번
3번	4번		5번

도로조명시설 정비

〈2차사업〉

해송보도교 설치	마을회관 건립	진입부 상징조형물 설치

〈3차사업〉

해안도로 보행성 향상 공사	방파제 디자인 개선	방파제 경관조명 설치

〈4차사업〉

공영주차장 건립	옥외 광고물 정비	하늘전망대 설치

5. 부산글로벌테크비즈센터 건립

사업목적

○ 특구의 R&BD 허브 및 산학연 교류협력 활성화 등 연구기능 및 비즈니스 기능이 결합된 기술사업화 종합지원시설 건립

사업개요

○ 위    치 : 강서구 미음R&D허브단지(부산특구 R&D융합지구 내)

○ 사업규모 : 부지 19,188㎡, 연면적 12,965㎡(지상 9층)

- 부산특구본부, 기술사업화기업, 전문연구소 등 입주시설, 국제회의장

○ 총사업비  : 38,338백만원(국비 19,169, 시비 19,169)

○ 사업기간  : 2014. 1. ~ 2018. 8.

추진상황

○ ’14. 7~10. : 총사업비 확정(392억원)

○ ’15. 1~6.  : 부지매입 계약, 건축설계 공고(3~6월)

○ ’15. 7~’16. 8 : 기본 및 실시설계 용역

○ ’16. 8~11. : 설계 및 공사원가 검토(조달청), 계약심의(市)

○ ’16. 12.   : 공사착공

○ ’17. 3.    : 총사업비 및 사업기간 조정(시설규모조정 16,732㎡→12,965㎡)

▻ 사업비: 39,200백만원→38,338백만원, 사업기간: ‘14∼‘17→‘14∼‘18(1년 연장)

○ ’18. 8.    : 공사 준공(예정)

기대효과

○ 조선해양플랜트 산업의 국가 R&BD 허브 내 거점역할을 수행하는

랜드마크 조성으로 국제비즈니스 및 글로벌 네트워크 활성화 촉진

☎ 문의 / 부산광역시 연구개발과 888-4514

□ 위치도

□ 조감도

6. 부산지식산업센터 건립

사업목적

○ 도심 내 공장용지 가격상승으로 입지에 어려움을 겪는 중소기업의 입지애로 해소 및 저소득층 고용확대를 통한 생산적 일자리 창출

사업개요

○ 위    치 : 부산광역시 북구 금곡대로 550번길 16

○ 규    모 : 대지 9,900㎡, 연면적 16,227㎡(지하 1, 지상 6)

○ 사업기간 : 2012 ~ 2016

○ 총사업비 : 300억원(공사202, 보상비79, 기타19) *국비158, 시비142

○ 주요시설 : 입주시설 38실, 지원시설 14실 등

추진상황

○ ‘12. 10 : 지식산업센터 기본계획 수립

○ '13.  3 : 토지매입(부산시↔조달청)

○ '13.  9～'14. 8. : 중간 및 실시설계 용역

○ '14. 12 : 공사착공

○ ’15.  4 : 운영기본계획 수립 및 위탁운영기관(부산경제진흥원) 선정

○ ’16. 6~9  : 부산지식산업센터 운영 준비(입주업체 모집 등)

○ ‘16. 11 : 공사준공

○ ‘17.  3 : 부산지식산업센터센터 개관식 개최

기대효과

○ 도심 내 산업입지 개발·공급으로 지역 중소기업 경쟁력 강화

○ 역외기업 유치, 첨단 제조·ICT 융합 연구개발 기능 수행 등으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출

☎ 문의 / 부산광역시 창업지원과 888-6732

□ 위치도

□ 조감도

7. 산성터널 건설(민자)

사업목적

○ 서부경남과 부산 동부권을 연결하는 광역교통망 구축

사업개요

○ 위    치 : 북구 화명동 ~ 금정구 장전동

○ 규    모 : 도로건설 L=5.62㎞, B=27~42m

○ 사업기간 : 2012 ~ 2018

○ 총사업비 : 3,004억원(국비164, 시비425, 민자2,415)

추진상황

○ ’10.  3. : 기본 및 실시설계 완료

○ ’12.  4. : 실시협약 체결

○ ’13.  4. : 실시계획 승인 고시(부산광역시 고시 제2013-142호)

○ ’13.  8. : 공사착공

○ ’16.  8. : 터널굴진(관통) 4,873m 완료

○ ’17.  6. : 라이닝콘크리트 및 접속구간 시공 중(현공정 70%)

○ ‘18.  9. : 준공 예정

기대효과

○ 동‧서간 연결 간선도로망 확충으로 만성적인 교통체증 해소

○ 교통 분산 효과를 통한 원활한 소통으로 지역 발전 기대

☎ 문의 / 부산광역시 도로계획과 888-2724

□ 위치도

구 분	내 용
	‘16 이전
	‘17 투자
	‘17 1회 추경
	‘18 이후 투자

□ 현장사진

시점부(북구 화명측)	터널 내부

8. 천마산터널 건설(민자)

사업목적

○ 항만배후도로 및 내‧외부 순환도로 수송체계 구축

사업개요

○ 위    치 : 서구 암남동(남항대교) ~ 사하구 구평동

○ 규    모 : 도로건설 L=3.28㎞, B=19~46m

○ 사업기간 : 2007 ~ 2018

○ 총사업비 : 3,065억원(국비299, 시비967, 민자1,799)

추진상황

○ ‘11.  4. : 민간투자사업 실시협약 체결

○ ‘12.  7. : 천마산터널 민간투자사업 실시계획 승인 고시

○ ‘12. 10. : 공사착공

○ ‘13.  9. : 실시계획 변경 고시(천연가스발전본부 내 노선 변경)

○ ‘16. 10. : 실시계획 변경 고시(공사기간 26개월 연장)

○ ‘17.  7. : 지하차도 터파기 및 구조물 시공 중(현공정 70.8%)

○ ‘18. 12. : 준공 예정

기대효과

○ 항만배후도로 확충으로 내‧외부 순환도로망 확충을 통하여 만성적인 교통체증 해소

○ 교통흐름 개선을 통한 원활한 소통으로 물류비 절감 등으로 항만 경쟁력 강화

☎ 문의 / 부산광역시 도로계획과 888-2722

□ 위치도

<총 사업개요>

○ 위치 : 사하구 신평동~ 사하구 구평동

○ 사업규모

- 도로건설 L=2,310m, B=21.7~35m

○ 사업비 : 179,285백만원

(공사:162,732 보상:6,005 기타:10,548)

○ 공사기간 : 2014.~2020.

<2016년 이전 투자>

○ 사업규모

- 도로건설 L=100m

○ 사업비 : 19,763백만원

(공사 7,960, 보상 6,000, 감리 1,000, 기타 4,803)

<2017년 투자>

○ 사업규모

- 도로건설 L=220m

○ 사업비 : 17,402백만원

(공사 16,337, 보상 5, 감리 1,000, 기타 60)

<2017년 1회 추경>

○ 사업규모

- 도로건설 L=100m

○ 사업비 : 8,600백만원

(공사 8,600)

<2018년 이후 투자>

○ 사업규모

- 도로건설 L=1,890m

○ 사업비 : 133,520백만원

(공사 129,835, 감리 3,440, 기타 245)

구 분	내 용
	‘16 이전
	‘17 투자
	‘17 1회 추경
	‘18 이후 투자

□ 현장사진

지하차도(감천사거리)	터널 갱구부

9. 도시철도 1호선 연장(다대선) 건설

사업목적

○ 서부산권 도시철도망 확충으로 지역균형발전 촉진

○ 신평․다대지역의 만성적인 교통난 해소

사업개요

○ 위    치 : 사하구 신평～장림～다대동 일원

○ 사업기간 : 2006 ~ 2017

○ 규    모 : L=7.98Km, 6개역, 차량기지 1개소

○ 총사업비 : 9,589억원(공사비 8,734, 보상비 240, 기타 615)

추진상황

○ ‘08.   : 기본계획 승인(국토해양부, 6월), 기본 및 실시설계착수(기타공사, 10월)

○ ‘09.11. : 1～4공구 착공(턴키구간)

○ ‘10.11. : 5～6공구 착공(대안구간)

○ ‘14. 7. : 건축 및 기계공사 착수

○ ‘16.11. : 건설공사 완료

○ ‘17. 4. : 개통

기대효과

○ 신평․장림․다대지역 교통난 해소, 다대포 관광객 편의 도모

○ 서부산권 일원 개발수요 대비, 지역간 균형발전 도모

○ 신평․장림․다대지역 등 주변 지역경제 활성화

☎ 문의 / 부산광역시 철도시설과 888-4072

□ 위치도

□ 조감도

10. 노포 화물차 공영차고지 조성

사업목적

○ 화물차량의 도심진입 억제를 통한 도심교통환경개선

○ 운수사업자에게 주차공간을 제공하여 불법 주ㆍ박차 방지

사업개요

○ 위    치 : 금정구 노포동 108-2번지 일원(노포IC 출구부)

○ 규    모 : 부지 42,794㎡, 주차 218면, 부대시설 1식

○ 주요시설 : 관리실, 사무실, 회의실, 샤워실, 수면실 등

○ 총사업비 : 269억원(국비242, 시비27)

○ 사업기간 : 2009 ~ 2016

추진상황

○ ‘09. 09~’12. 02 : 기본 및 실시설계용역

○ ‘11. 08 : GB관리계획변경 및 도시관리계획 결정

○ ‘13. 01 : 보상완료

○ ‘14. 09 : 공사착공

○ ‘15. 05 : 문화재발굴조사 완료

○ ‘16. 11 : 공사 준공

○ ‘17. 02 : 차고지 운영

기대효과

○ 만성적인 화물자동차 주ㆍ박차 난 해소

○ 화물자동차 운전자의 편의제공으로 안전사고 예방

☎ 문의 / 부산광역시 교통관리과 888-4054

□ 위치도

□ 전경사진

11. 레이저 가공기술 산업화 지원센터

사업목적

○ 첨단기술인 고출력 레이저기술과 ICT융합을 통한 중소기업에 대한
기술지원

사업개요

○ 위    치 : 강서구 미음지구(R&D허브 단지내)

○ 사업규모 : 부지 6,602㎡, 연면적 3,689㎡(지하1층/지상3층), 장비구축 40종

○ 사업주관 : 한국기계연구원(부산레이저기술지원센터)

○ 사업기간 : 2012. 10 ~ 2018. 3

○ 총사업비 : 281.4억원(국비 172.8(장비 등), 시비101(건축 ․ 부지), 민자 7.6)

○ 사업내용 : 가공기술 산업화 지원 센터 건축 및 관련 장비 구축

추진상황

○ ’12. 9 : 전국 사업 공모 선정(지식경제부)

○ ’16. 3 : 센터개소

○ ’16. 5 : 건물 공유재산 사용료 면제 허가(부산시→한국기계연구원)

○ ’17. 5 : 장비 도입 1종 (하반기중 4종 도입예정)

○ ’18. 3 : 부지비 3차 잔금 1,048백만원 납부(부산시)

기대효과

○ 부산권 주력산업(기계, 자동차, 조선 등)의 공정 혁신, 생산성 향상 등을 통한 고부가가치화

☎ 문의 / 부산광역시 기간산업과 888-4634

□ 위치도

□ 조감도

12. 조선해양기자재 성능고도화 기반구축

사업목적

○ 국제규제 대응 기업 지원 국제공인시험체계 구축

사업개요

○ 위치/면적 : 강서구 미음R&D허브단지 / 17,679.8㎡(연면적 7,870.68㎡)

○ 사업 기간 : '14 ∼ '18(5년)

○ 사 업  비 : 333억원(국비 190, 시비 133, 민자 10)

↳ 장비, 전기  ↳ 부지(93), 건축  ↳ 건축

○ 주관 기관 : 산업통상자원부(전담기관 : 한국산업기술진흥원 KIAT)

○ 시행 기관 : (재)한국조선해양기자재연구원(KOMERI)*

* 산업기술혁신촉진법 규정에 의거 산업부로부터 설립허가를 받는 전문생산기술연구소

추진상황

○ '14. 05 : 기반구축사업 시행계획 주관기관 정책지정 확정 통보

○ '14. 10 : (행자부) 투자심사, 부동산 시소유 조건부 승인

○ '14. 12 : (시의회) 공유재산 취득승인 및 시비예산 확정

○ '15. 02 : 부지매매계약 체결(부산시↔부산도시공사)

○ '15. 07 : 공사착공

○ '16. 06 : 센터건축 준공

○ '17. 04 : 장비구축 4종

○ '17. 12 : 국비확보에 따른 순차적 장비구축 9종

기대효과

○ 극지용 선박 및 글로벌 환경규제 대응하는 기자재 개발 지원

○ 기업 공동활용, 공인 시험인증 통합 지원체계 구축

☎ 문의 / 부산광역시 기간산업과 888-4651

□ 위치도

□ 배치도

13. 천체투영시스템 구축 사업

사업목적

○ 기존에 운영하고 있는 천문대의 기능을 보강하고, 날씨, 계절에 관계없이 운영이 가능한 천체투영관 설치를 통해 수련원운영 활성화 및 지역관광 활성화 도모

사업개요

○ 위    치 : 부산광역시 수영구 광안동 황령산로 156

○ 사업기간 : ’16.8.2. ~ 12.26.

○ 규    모 : 지상 1층, 1개동(연면적 250.2㎡)

○ 주요시설 : 천체투영관(천체투영실 53명, 다목적실 50명)

○ 총사업비 : 1,000백만원(국비800, 시비200)

추진상황

○ ‘16. 2. : 천문대 기능보강사업 변경 건의(결재 : 부시장)

○ ‘16. 2. : 공유재산심의

○ ‘16. 5. : 계약심사 요청(결과통보 : ‘16. 5. 26.)

○ ‘16. 6. : 천체투영시스템 구축 사업 계획

○ ‘16. 7. : 협상적격자 선정 및 협상시행

○ ‘16. 8. : 협상에 의한 계약 체결(착공 : ‘16. 8. 2)

○ ‘16. 9. : 경관심의 조건부의결(심의일자 : ‘16. 9. 9.)

○ ‘16.12. : 준공(‘16.12.26.)

기대효과

○ 사계절 운영 가능한 천체투영관 운영을 우리시의 관광네트워크와 연계한 사업추진을 통한 지역관광활성화와 우리수련원 경영수지 개선

○ 청소년들에게 천문우주과학에 대한 탐구 및 교육의 기회를 만들어 줄 수 있는 특화된 천문체험시설 운영을 통해 청소년활동 수요에 대응할 수 있는 체재 구축

☎ 문의 / 부산광역시 금련산청소년수련원 610-3222

□ 위치도

□ 조감도

14. 수정터널 상부공간 연결 공원화 사업

사업목적

○ 2001. 8월 수정터널 개통으로 인하여 단절된 지역생활권 복원과 터널로 인한 소음·분진 차단 등 지역환경 개선

사업개요

○ 위    치 : 부산진구 관문대로 수정터널 입구

○ 사업기간 : 2014. ~ 2018.

○ 규    모 : A=9,000m²(L=180m, W=40 ~ 70m)

○ 주요시설 : 인공지반(복개구조물), 커뮤니티센터, 공동체정원(녹지) 등

○ 총사업비 : 233.3억원(국비 101.7, 시비 129.2, 구비 2.4)

추진상황

○ ’11. 12. : 입체도시공원 타당성 용역(국토교통부, B/C=1.27)

○ ’13.   6. : 국토교통부 도시활력증진지역 개발사업 대상지 선정

○ ’14.  8. : 실시설계용역 착수 ( ’14. 8. 19.  ∼ ’15. 12. 15. )

○ ’15.  4. : 도시녹화기술심의회 심의

○ ’15.  7. : 설계의 경제성검토(VE) 완료

○ ’15.  10. : 건설기술심의

○ ’15. 12. : 실시설계 용역 준공

○ ’16.  4. : 토목공사 착공

○ ’17.  5. : 구조물(교각, 교대) 설치완료

○ ’17.  5. : 토목공사(2차) 및 전기공사 발주

기대효과

○ 부족한 공원녹지 공간 확충 및 도심재생 등 주거지역 활성화

☎ 문의 / 부산광역시 공원운영과 888-3814

□ 위치도

□ 조감도

15. 자갈치 글로벌 수산명소화 조성

사업목적

○ 인근 관광자원과 연계, 국제적 명성에 걸맞은 해양수산복합공간 조성

○ 국내 최대 수산관광지인 자갈치일원의 위생 및 식품안전성강화

사업개요

○ 위    치 : 부산광역시 중구 자갈치 해안로 52일원

○ 사업기간 : 2014년～2018년

○ 규    모 : 부지 3,469.6㎡, 연면적 2,288㎡

○ 총사업비 : 93억원(국비 50%, 시비 50%)

추진상황

○ ‘15. 12월,  입주예정 노점상 전수조사 1차

○ '15. 12월,  기본 및 실시설계 용역 착수

○ '16.  3월,  입주예정 노점상 전수조사 2차

○ '16. 10월,  기본 및 실시설계 완료

○ '16. 11월,  사업계획 변경(총사업비 결정) 승인(해양수산부□시)     - 총사업비 조정 : 5,000백만원→9,345백만원(실시설계 용역결과)

- 위생･해수배관, 해수인입시설, 점포별 인입배선 추가반영

○ ‘16. 12월,  건축공사 계약(’16.12.09)

○ ‘17.  4월,  공사 착공 (’17. 4. 9.)

기대효과

○ 부산 원도심권 중심인 남항 개발을 통한 원도심 재창조

○ 수산시장 현대화로 자갈치일원 등 주변 지역경제 활성화

☎ 문의 / 부산광역시 수산유통가공과 오세호 888-5422

□ 위치도

□ 조감도